실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2021 - 2

담당부서

작성자

저탄소추진처 해상풍력사업팀

(오정훈 /052-216-5508 /jhoon_5@kno.co.kr)

사 업 명

동해1 부유식 해상풍력발전사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

구분	내용
사 업 명	동해1 부유식해상풍력발전사업
사업부지	울산항 동측 58km 동해가스전 해상플랫폼 반경 5km 해역
사업규모	200MW급 부유식 해상풍력 발전단지
총사업비	1조 6,867억원(100%기준)
사업주체	(2019.7~) 컨소시엄 (석유공사, 동서발전, 에퀴노르) (2024.1분기~) SPC (컨소시엄 3사는 주주로 참여)
사업기간	2021년~2047년 (건설 '21년~'27년, 운영 '28년~'47년)

ㅇ 추진경과

- '18.10월 ~ : 풍황계측장비 플랫폼 설치 및 운용

- '18.10월 : 울산시와 부유식 해상풍력발전사업 협업 MOU 체결

- `19. 7월 : 석유공사 - 에퀴노르 - 동서발전 컨소시엄 구성

- '19. 9월 ~ '20.5월 : 사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역

- '20. 4월 ~ 7월 : 플랫폼 하부구조물 1차 건전성 평가 용역

- '20. 9월 : 한국형 공급체계 구축을 위한 업무협약 체결

- '20.11월 : 정부 예비타당성조사 의뢰

- '21. 5월 : 정부 예비타당성조사 통과

- '21. 7월 ~ '22. 10월 : 하부구조물 심층평가 및 3자 검증 용역

- '21.11월 : 산업부 전기위원회 발전사업허가심의 통과

- '22. 6월 : 컨소시엄 참여사 JDA 체결

- '23. 5월 ~ 9월 : 해상풍력터빈 평가 용역

- '23. 6월 : 송전용전기설비 신규이용신청서 제출

- '23. 12월 : 특수목적법인 출자(안) 이사회 의결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 3급 천석봉 (現 2급)

- 최종 결재자 : 사장 양수영 (퇴직)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
실장	안범희	1급	'20.2~'23.12	사업 실무 총괄
처장	권오광	2급	'24.1 ~	사업 실무 총괄
팀장	박정철	3급	'20.10 ~	사업 운영 관리
부장	김종성	4급	'22.2 ~	운영 업무 담당
부장	김병준	4급	'21.8 ~	운영 업무 담당
차장	조동훈	4급	'20.10 ~	운영 업무 담당
차장	김랑희	4급	'19.1 ~	운영 업무 담당
차장	정연찬	4급	'22.1 ~	운영 업무 담당
차장	이종일	4급	'21.8 ~	운영 업무 담당
과장	조윤주	4급	'23.1 ~	운영 업무 담당
과장	오정훈	4급	'19.2 ~	운영 업무 담당
대리	권오현	5급	'22.7 ~	운영 업무 담당
대리	문재경	5급	'23.1~'23.12	운영 업무 담당

다른기관 또는 민간인 관련자

ㅇ 한국동서발전, Equinor(노르웨이 국영석유사)

추진실적

ㅇ 동해가스전 인근 우수한 풍황자원 확인

ㅇ 타당성조사 용역을 통해 사전 사업타당성 검증

ㅇ 국내 대중소기업과 상호협력체계 구축

ㅇ 플랫폼 하부구조물 1차 건전성평가 완료

ㅇ 정부 예비타당성조사 통과

ㅇ 전기위원회 발전사업허가심의 통과

ㅇ 컨소시엄 3사 공동개발협약 체결

ㅇ 플랫폼 하부구조물 심층평가 완료 및 제3자 인증서 획득

ㅇ 송전용전기설비 신규이용신청으로 한전 계통망 접속점 확보